Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót
 budowy drogi gminnej Koźlątków Emilianów gm Lisków
Zamawiający: UG Lisków
Kod CPV         45233140-2    roboty  drogowe
I spis  treści 
1.Lokalizacja i opis przedmiotu zamówienia
2.Opis i podstawowe dane techniczne
3.Zakres rzeczowy i zestawienie elementów robót
4.Wymagania dotyczące terminu realizacji robót
5.Wymagania dotyczące kadry technicznej
6.Wymagania dotyczące maszyn i sprzętu
7.Wymagania dotyczące materiałów
8.Pozostałe warunki realizacji zadania
9.Kontrola jakości realizacji robót
10.Warunki odbioru robót.

1.LOKALIZACJA I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Planowana do  budowy droga gminna Koźlątków Emilianów   jest położona na terenie gminy Lisków  droga  stanowi dojazd do wsi Emilianów w gm Koźminek i  zabudowań położonych tej drogi. Planowany odcinek do wykonania w 2006 r jest od km 0,500 do km 1,000
Droga, posiada   szerokość pasa drogowego  około  12-14,0m. posiada nawierzchnię z kruszywa naturalnego żwirową na całej długości odcinkami uzupełnioną przez okres wielu lat.
Projektuje się budowę drogi  gminnej  na  odcinku o długości  500m. zakres do wykonania w 2006r.
Budowa  polega na wykonaniu  wzmocnieniu  konstrukcji podbudowy na przedmiotowym odcinku drogi i wykonaniu nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej st II na warstwę ścieralną  oraz wykonaniu robót ziemnych w celu uzupełnienia poboczy obustronnie .

2.OPIS I PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
Przebudowa polega na uzyskaniu parametrów technicznych o nawierzchni bitumicznej;
* wzmocnieniu podbudowy  poprzez wyrównanie profilu i wykonanie warstwy górnej podbudowy o grubości 15 cm 
* szerokość jezdni  4,0 m.  
* szerokość poboczy ziemnych 1,0-1,5 m.  dwustronnie
* pochylenie poprzeczne jezdni dwustronne 2%   
w tym celu należy wykonać:
* profilowanie istniejącej nawierzchni żwirowej 
* wykonanie  podbudowę poprzez ułożenie górnej warstwy kamienia łamanego  twardego   (granit,  garbo, melafir)  o grubości 15 cm  stabilizowanego mechanicznie.
* skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2
*  wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej st II o grubości 5 cm wg PN-S-96025
* uzupełnienie poboczy gruntem miejscowym obustronnie na szerokość 1,0-m na średnią grubość  0,1m lub  gruntem  dowożonym na nasyp z miejscowych żwirowni najlepiej pospółka kamienisto-żwirowa

3.ZAKRES RZECZOWY I ZESTAWIENIE ROBÓT
Zakres robót  przedstawiono w projekcie budowlanym oraz w ślepym kosztorysie
Orientacyjnie zakresy wynoszą :
1.profilowanie i zagęszczenie podłoża   2100m2
2.wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 15 cm     2100m2
3.wykonani nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej gr 5 cm   2000 m2
4.plantowanie i uzupełnienie poboczy  1000 m2

4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE TERMINU ROBÓT
Realizacja robot winna być prowadzona w terminie od przekazania placu budowy wykonawcy  do terminy żądanego przez inwestora tj ..................2006 do 30.10.2006r.
Termin realizacji robót ze względów technologicznych wynika z wymagań norm jest to okres o  temperaturze większej niż 10. stopni C.
5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE KADRY TECHNICZNEJ

Realizacje robót związanych z  budową drogi gminnej Koźlątków Emilianów o długości 0.500 km  winno wykonywać przedsiębiorstwo specjalizujące się w robotach branży drogowej i posiadające sprzęt i kadrę odpowiednio przeszkoloną.
Wszystkie osoby wytypowane przez Oferenta do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, muszą być ujęte na liście uprawnionych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie prowadzonej przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. 
Pracownicy produkcyjni zatrudnieni przy realizacji zamówienia muszą posiadać niezbędną wiedzę zawodową, wymagane uprawnienia do obsługi sprzętu i przeszkolenie w zakresie BHP.
Wszyscy pracownicy wykonujący roboty na drodze winni posiadać odzież roboczą koloru pomarańczowego z elementami odblaskowymi.
6. WYMAGANIA DOTYCZACE  MASZYN I SPRZĘTU
Oferent winien  dysponować  maszynami i sprzętem  niezbędnymi dla prawidłowego wykonania zadania objętego  zamówieniem. 

7.WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Wszystkie użyte materiały muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, markę oraz znaki firmowe umożliwiające ich identyfikację Wszystkie materiały i urządzenia muszą być zastosowane zgodnie z dokumentacją projektową lub posiadać równoważne parametry i normy techniczne.
Za wbudowane materiały odpowiada wykonawca.
Materiały przewidziane do budowy winny spełniać wymagania Polskich Norm a w przypadku gdy nie ma odpowiedniej normy winny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym (Aprobaty Techniczne) wydanym przez odpowiednie organy. Materiały przewidziane do wbudowania a składowane wcześniej na składowisku wykonawcy winny być przebadane przez laboratorium wykonawcy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. W przypadku stwierdzenia, że materiały nie odpowiadają wymogom, należy zabronić ich wbudowania oraz usunąć z placu budowy.
Materiały winny być magazynowane w miejscach pozwalających na ciągłość dostawy na budowę. Materiały należy składować w sposób uniemożliwiający ich zanieczyszczenie i zmieszanie z materiałami innego rodzaju.
Materiały użyte do budowy winny odpowiadać następującym normom:
a)	PN-B-11112 Kruszywa mineralne- Kruszywa do nawierzchni drogowych
b)	PN-B-11111 Kruszywa mineralne Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych
c)	Receptura opracowana na podstawie PN-S-96025 Nawierzchnie asfaltowe wymagania.
Stabilność MMA dla warstwy ścieralnej winna wynosić 5,5kN 
aprobaty techniczne na (emulsję asfaltową),  

8.WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:
Wykonawca odpowiada za prawidłowa realizację robót, w tym celu winien:
* prowadzić dziennik budowy (lub zeszyt wydany przez inwestora)
* oznakować  roboty drogowe.
* opracować harmonogram realizacji robót i przedstawić do akceptacji inspektorowi nadzoru
* dysponować materiałami, sprzętem, maszynami i kadrą pozwalającą za zachowanie  rytmiczności realizacji robót zgodnie z harmonogramem
* dysponować sprzętem do wykonania pomiarów kontrolnych robót i badań kontrolnych  laboratoryjnych  jakości  zgromadzonych materiałów
Prowadzić roboty wg wymagań  PN i technologii jak niżej;
* wytyczenie osi trasy i poziomów winien wykonać uprawniony geodeta
* roboty ziemne na poszerzeniach i na uzupełnienie nasypu poboczy.
Roboty ziemne wykonywać wg wymagań PN-02205 Drogi samochodowe Roboty ziemne,  
wymagania i badania.
* wykonanie podbudowy z  kruszywa łamanego o grubości 15 warstwa górna Zakres wykonania podbudowy obejmuje:     wykonanie górnej warstwy podbudowy o szerokości   4,2 m.
* dowóz  kruszywa kamiennego  z skał twardych (granit, garbo, melafir) na odcinek drogi,
* rozścielenie (wbudowanie) tłucznia i  klińca  oraz  zagęszczenie wg założonego profilu poprzecznego
Roboty związane z wykonaniem podbudowy winny spełniać wymagania PN-S-06102.  
Drogi samochodowe Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
* Spryskanie podbudowy emulsją asfaltową 65% w ilości 0,7 kg/m2
* Nawierzchnia z mas bitumicznych warstwa ścieralna gr 5 cm wg PN-S-96025 dla KR1 całość robót przy układaniu nawierzchni wykonana mechanicznie wymagania dla mas bitumicznych i warunków ułożenia wg PN-S-96025

9.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrolę i badania laboratoryjne są prowadzone przez wykonawcę i przez inspektora nadzoru, i podlegają jej wszelkie asortymenty robót  na każdym stadium robót.
Badania laboratoryjne materiałów wbudowywanych, wykonawca przeprowadza we własnym zakresie i jednocześnie gromadzi świadectwa od dostawcy, 
Koszty badań laboratoryjnych pokrywa wykonawca.
W przypadku rozbieżności co do wyników laboratorium wykonawcy inspektor nadzoru może podjąć decyzję o sprawdzeniu badań laboratoryjnych przez laboratorium wskazane przez inspektora nadzoru na koszt zamawiającego w przypadku rozbieżnych wyników badań na niekorzyść wykonawcy koszty te pokrywa wykonawca.
Kontrola jakości wykonanych robót dokonuje się  na podstawie pomiarów kontrolnych wykonywanych przez inspektora nadzoru  a polegających na sprawdzeniu zgodności z Polskimi Normami.
Pomiarami kontrolnymi obejmuje się każdy asortyment robót  dotyczący:
Wykonania   profilowania  koryta    
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
Wykonanie nawierzchni z mas bitumicznych
Kontrolą wizualną obejmuje się :
Oczyszczenie poszczególnych warstw konstrukcji jezdni 
Dostawę materiałów kamiennych na podbudowę 
Badaniami laboratoryjnymi należy objąć:
* jakość dostarczanego kruszywa
* zagęszczenie podłoża  na poszerzeniach .
* badania składu mineralnego mas bitumicznych
* pomiary kontrolne wykonanej nawierzchni z mas bitumicznych
Wszelkie wyniki kontroli odnotowuje inspektor nadzoru w dzienniku budowy.
10.WARUNKI ODBIORU ROBÓT.
Odbiory robót na każdym stadium robót dokonuje inspektor nadzoru lub wyznaczona przez zamawiającego komisja. 
Rodzaje odbiorów robót.
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
1.  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu
2.  odbiorowi częściowemu,
3.  odbiorowi końcowemu
4.  odbiorowi pogwarancyjnemu.

1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie , nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami.
Odbiorowi podlegają :
* profilowanie i zagęszczenie podłoża
* wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (tłucznia) po wykonaniu pomiarów  kontrolnych i badań   laboratoryjnych
* skropienie podbudowy emulsją asfaltową
Odbiór robót zanikających winien być potwierdzony wpisem do dziennika i zawierać klauzulę zezwalającą na kontynuowanie robót.
2. Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy wstępnym odbiorze robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
3. Końcowy odbiór robót.
Odbiór robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do wstępnego odbioru robót będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z powiadomieniem na piśmie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.
Wstępny odbiór robót nastąpi w terminie 3 dni, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów niżej wymienionych.
Wstępnego odbioru robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją i uzgodnieniami. W toku odbioru  robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin wstępnego odbioru robót. W przypadku stwierdzenia przez komisję , że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo eksploatacji, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. Podstawowym dokumentem dokonania wstępnego odbioru robót jest protokół odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Odbiór robót końcowy stanowi podstawę do przejęcia wykonanych budowli, instalacji i urządzeń w użytkowanie przez Zamawiającego.
Do odbioru Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
* dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową , jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
* sprawozdanie techniczne z realizacji przedmiotu zamówienia,
* dzienniki budowy i rejestry obmiarów ( oryginały),
* wyniki pomiarów oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, jeżeli były wymagane,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do wstępnego odbioru robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
W przypadku gdy przedłożone wyniki odbiegają od wymagań normowych stosuje się 
potrącenia za wady trwałe wg instrukcji o odbiorach robót drogowo-mostowych DPT-14 lub postępuje się zgodnie z klauzulami Polskich Norm.
Termin odbioru końcowego winien być przeprowadzony w ciągu 30 dni od zgłoszenia ..
Na odbiór wykonawca winien przygotować wszystkie wyniki badań laboratoryjnych, pomiarów kontrolnych. Świadectwa dopuszczenia do stosowania od dostawców, sprawozdanie techniczne,  dziennik budowy.
Odbiór ostateczny jest dokonywany po okresie gwarancji.

                                                                                                    Specyfikację zatwierdzam

Lisków  6. 09.2006r.                                                                   ..........................................